2		군위전통시장 시설 현대화

□ 인구감소와 유통환경 변화로 인해 시장기능이 상실되고 시설 또한

노후화되어 시설환경의 변화가 필요함

∙ 기 간 : 2012 ~ 2015 ∙ 위 치 : 군위읍 중앙5길 12-8 ∙ 규 모 : 8,681㎡	∙ 총사업비 : 4,331백만원 (국2,370 도·군1,961) ∙ 사업내용 : 아케이드, 바닥정비, 다목적광장, 상가건물 신축 등

Ⅰ

사업개요

Ⅱ

추진상황

∙ 기본 및 실시설계용역 완료 : 2012년 4월 ~ 10월

∙ 군위전통시장 현대화사업 착공 : 2013년 2월 15일

∙ 군위전통시장 현대화사업 준공(1,2차) : 2013년 9월 6일

∙ 군위전통시장 현대화사업 3차사업 추진 : 2014년 1월

∙ 군위전통시장 현대화사업 아케이드 분야 준공 : 2014년 6월

Ⅲ

향후계획

∙ 건축공사, 간판설치사업 등 하반기 사업 완료 예정

∙ 군위전통시장 상가건물 신축 : 2015년 사업비 확보 후 추진(실시설계 중)

Ⅳ

현장사진