	주요 투자사업 추진현황

11-1. 투융자심사 대상사업

우리 군위군에서 ‘14년에 추진한 투융자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	2013년까지 집행사업비	2014년 소요사업비	2015년 이후 사업비	사업완료 예정연도	투융자 심사연도	현재까지진척률(%)
군위보건소~ 국도5호선간도로 확·포장공사	3,600	106	501	2,993	2018	2014	10%
군위군 종합운동장 건립	30,800	-	-	30,800	2018년	2014년	10%
군위군 사회인 야구장 건립	2,500	-	-	2,500	2016년	2014년	10%
군위농산물 산지유통센터건립	4,000	-	4,000	-	2014	2014	100%
과실유통시설 현대화사업	6,000	-	6,000	-	2014	2014	100%
군위군광역친환경농업단지조성사업	7,210	-	715	6,495	2016	2013	20%
송원교 개체공사	2,800	635	65	2100	2016	2014	25%
천주교 공원묘지 진입로 확포장공사	2,000		1,200	800	2016	2014	60%
노행~용대간 도로 확포장공사	2,500	-	1,200	1,300	2016	2014	40%
소보면 지방상수도 확장공사	4,596	-	1,425	3,171	2016	2013	70%

‣ (대상사업) 투융자심사(중앙의뢰, 시도의뢰, 자체 포함)를 통과(적정, 조건부)하여 2014년에 추진한 사업으로 총사업비는 심사이후 변경이 있는 경우 ‘14년말 기준으로 작성되었습니다.

11-1-1. 개별 투융자심사 사업의 추진현황

사업명

군위보건소~국도5호선간도로(대로1-1호) 확·포장공사

담당자

도시새마을과

손진두(☎380-6248)

□ 사업목적 및 필요성

○ 시가지 간선도로 개설로 지역발전 가속화 및 주민숙원 해소

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014년 ~ 2018년(5년)

○ 위 치 : 군위읍 동부리 일원

○ 규 모 : L=420m, B=35m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,600백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2014년	2015년	2016년 이후
계	3,600	106	42	565	2,887
국 비
시 도 비	1,800				1,800
시군구비	1,800	106	42	565	1,087
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10 %)

○ 실시설계용역 중

□ 향후계획

○ 2015년 3월 실시설계용역 완료

○ 2015년 6월 공사 착수

○ 2018년 5월 공사 완료

사업명

군위군 종합운동장 건립

담당자

문화관광과

오기윤(☎380-6880)

□ 사업목적 및 필요성

○ 상대적으로 열악한 문화‧체육환경과 여가시간 증대 및 건강에 대한 관심       고조 등으로 인프라 구축 필요

○ 종합운동장의 부재로 각종 체육행사 등을 학교 및 생활체육공원에서        개최하여 공간 협소 및 교통안전 등 많은 문제점 발생

○ 종합운동장 설치로 엘리트체육 및 학교‧직장체육 등 생활체육활성화로        군민 건강 증진 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014년 ~ 2018년 (5년간)

○ 위 치 : 경상북도 군위군 군위읍 내량리 1-1번지 일원

○ 규 모 : 부지 131,692㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 30,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2014년	2015년	2016년 이후
계	30,800			4,350	26,450
국 비	7,200				7,200
시 도 비	1,500				1,500
시군구비	22,100			4,350	17,750
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○2013. 10월 : 군위군 중기지방재정계획(2013~2017) 반영

○2013. 12월 : 종합운동장 건립 타당성 조사 완료(적정)

○2014. 02월 : 공유재산관리계획 승인

○2014. 03월 : 부지매입비 예산 반영

○2014. 07월 : 투‧융자심사(중앙)

○2014. 11월 : 토지 보상 업무 협약 및 착수

(82필, 131692㎡ 한국농어촌공사 위탁)

○2015. 02월 : 군관리계획 결정(변경) 용역 발주

사업명

군위군 사회인 야구장 건립

담당자

문화관광과

오기윤(☎380-6880)

□ 사업목적 및 필요성

○ 사회인 야구인들의 증가로 인한 상설 야구장시설 요구 충족

○ 야구장과 지역 내 풍부한 관광자원을 연계하고 다양한 체험 학습장의        운영으로 지역경제 활성화 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014년 ~ 2016년 (3년간)

○ 위 치 : 경상북도 군위군 군위읍 내량리 1-1번지 일원

○ 규 모 : 부지 39,000㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2014년	2015년	2016년 이후
계	2,500			100	2,400
국 비	2,250				2,250
시 도 비
시군구비	250			100	150
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○2014. 06월 : 생활권 선도사업 확정

○2014. 11월 : 토지 보상 업무 협약 및 착수

○2014. 12월 : 공유재산관리계획 수립

○2015. 02월 : 군관리계획 결정(변경) 용역 발주

□ 향후계획

○2015. 07월 : 기본 및 실시설계 용역 발주

○2015. 12월 : 토지보상, 군 관리계획 반영 및 실시설계 완료

○2016. 02월 : 공사발주 및 착공

○2016. 12월 : 준공예정

사업명

군위 농산물 산지유통센터 건립

담당자

농정과

김시춘(☎380-6277)

□ 사업목적 및 필요성

○ 유통환경 변화에 대응하여 주산지별로 품목 특성에 맞는 규모화 및 현대화 된 산지 유통시설을 지원하여 농산물 생산·유통 계열화의 거점으로 육성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013. 10. ∼ 2014. 12.

○ 위 치 : 경북 군위군 의흥면 원산리 1076번지

○ 규 모 : 건축면적 1,714.86㎡ (1식)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  4,000 백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2014년	2015년	2016년 이후
계	4,000		4,000
국 비	1,600		1,600
시 도 비	400		400
시군구비	800		800
지 방 채
민간자본	1,200		1,200
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100 %)

○공사착공 2013. 10.

○공사준공 2014. 12. 15.

사업명

과실유통시설 현대화사업

담당자

농정과

백순무(☎380-3296)

□ 사업목적 및 필요성

◦ 가공량 확대 수요에 따른 여과·농축설비 및 생산설비 등 증설 필요

◦ 저품위 사과 격리 및 가공을 통한 신소비 영역 창출 기여 농가소득안정

◦ 재해시 낙과처리 등 신속한 재해대응체계 구축 및 원활한 과실수급대책 추진

◦ 태풍 등 재해로 인한 저급품 시장유입 차단

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014년 2월 ~ 12월

○ 위 치 : 경상북도 군위군 의흥면 동부로 935-14 음료가공공장 내

○ 규 모

•사과 가공설비 증설(1일 250톤 ⇒ 500톤)

•제품생산설비 현대화(1일 30만병 ⇒ 50만병)

(공병투입기, 상표부착기, 냉각기, 팩 포장지, 적재기)

• 보관시설 증설 : 1,320㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,000백만원                                   (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2014년	2015년	2016년 이후
계	6,000		6,000
국 비	1,800		1,800
시 도 비	500		500
시군구비	1,300		1,300
지 방 채
민간자본	2,400		2,400
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2014년 12월 사업완료

사업명

군위군광역친환경농업단지조성사업

담당자

농정과

김병석(☎380-6293)

□ 사업목적 및 필요성

◦ 지역농업의 특성을 살린 친환경 중장기농업발전모델 개발

◦ 고품질 명품 농산물 생산 및 지역 환경보전으로 국민건강 기여

◦ 농가소득 증대로 군민의 「삶의 질」향상

□ 사업개요

○ 기 간 :  2014년 ~ 2016년

○ 위 치 : 군위군 일원 2개권역(서남권, 동북권)

○ 규 모 : 부지면적 627ha

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 7,210백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2014년	2015년	2016년 이후
계	7,210.0	-	715.0	6039.0	456.0
국 비	2,163.0	-	214.0	1,812.5	136.5
시 도 비	1,081.5	-	85.8	724.5	54.9
시군구비	1,082.5	-	200.2	1,690.5	128.1
지 방 채
민간자본
기 타	2,163.0	-	215.0	1,811.5	136.5

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

○ 농축산자원화 시설사업 추진 (7.4억)

•가축분뇨수거차량 구입 1대 (1.6억)    •퇴비살포기 구입 2대 (1.3억)

•원료이송 진게덤프 구입 1대 (0.7억)   •로더 구입 1대 (1.4억)

•버큠타 구입 1대 (1.4억)

○ 부지 구입 및 실시설계 준비중

□ 향후계획

○ 부지구입 및 실시설계

○ 건축사업 착공 및 준공

사업명

송원교 개체공사

담당자

안전건설과 김경락

(☎380-6392)

□ 사업목적 및 필요성

○ 노후교량 개체로 주민 통행불편 해소 및 재해 위험 예방

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014년 ~ 2016년

○ 위 치 : 군위군 소보면 송원리 지내

○ 규 모 : 교량개체 L=84m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	2,800	635	65	700	1,400
국 비
시 도 비
시군구비	2,100			700	1,400
지 방 채
민간자본
기 타	700	635	65

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 25%)

○ 실시설계 완료 : 2014. 10월

○ 공사 착공     : 2015. 01월

□ 향후계획

○ 공사 준공 : 2016. 12월

사업명

천주교 공원묘지 진입로 확포장공사

담당자

안전건설과 김경락

(☎380-6392)

□ 사업목적 및 필요성

○ 군도 및 농어촌도로 확장으로 주민 통행불편 해소

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014년 ~ 2016년

○ 위 치 : 군위군 군위읍 용대리 지내

○ 규 모 : 교량개체 L=2.0km

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	2,000		1,200	400	400
국 비
시 도 비	800		600	200
시군구비	1,200		600	200	400
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

○ 실시설계 완료 : 2014. 02월

○ 공사 착공     : 2014. 03월

□ 향후계획

○ 공사 준공 : 2016. 12월

사업명

노행～용대간 도로 확포장공사

담당자

안전건설과 김경락

(☎380-6392)

□ 사업목적 및 필요성

○ 군도 확포장 사업을 통하여 주민 통행 및 농산물 유통을 원활히 함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014 ~ 2016

○ 위 치 : 군위군 군위읍 용대리, 효령면 노행리 지내

○ 규 모 : 진입로 확,포장 L=2.3km

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	2,500		1,200	300	1,000
국 비
시 도 비	600		600
시군구비	1,900		600	300	1,000
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

○ 실시설계 완료 : 2014. 03월

○ 공사 착공     : 2014. 04월

□ 향후계획

○ 공사 준공 : 2016. 12월

사업명

소보면 지방상수도 확장공사

담당자

수도환경사업소

김창근(☎380-7912)

□ 사업목적 및 필요성

○ 맑고 깨끗한 수돗물의 안정적인 공급으로 보건위생 향상 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014. 05.29 ~ 2016. 05. 17

○ 위 치 : 군위군 소보면 일원

○ 규 모 : 상수관로 L=30km

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,596백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2014년	2015년	2016년 이후
계	4596		1425	3,171
국 비	3220		1,000	2,220
시 도 비	414		129	285
시군구비	962		296	666
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)

○ 소보면 지방상수도 확장공사 1차 준공(L=11km) : 2015년 3월

○ 소보면 지방상수도 확장공사 2차 착공(L=19km) : 2015년 4월

□ 향후계획

○ 소보면 지방상수도 확장공사 전기, 통신 발주 : 2015년 8월

○ 소보면 지방상수도 확장공사 2차 준공(L=19km) : 2016년 5월