9

주요 투자사업 추진현황

9-1. 투자심사 대상사업

우리 군위군에서 ‘15년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	2014년까지 집행사업비	2015년 소요사업비	2016년 이후 사업비	사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지진척률(%)
삼국유사 가온누리 조성사업	134,306	20,087	10,375	103,844	2019	2010	30%
효령,고로 전투기념공원 조성	6,725	0	725	6,000	2017	2012	20%
김수환추기경 사랑과나눔공원조성사업	12,100	7,600	2,200	2,300	2016	2011	30%
군위군종합운동장건립	30,800		4,293	26,507	2018	2014	5%
군위군사회인야구장 건립사업	2,500	417	1,670	413	2016	2014	60%
삼국유사 목판사업	3,400	600	1,000	1,800	2017	2015	60%
임산물산업화지원단지 조성	5,450	416	2,454	2,580	2016	2013	70%
장곡휴양림 자생식물원 조성사업	1,500		44	1,456	2017	2014	10%
군위군광역친환경농업단지조성사업	7,210	715	2,434	4,061	2016	2013	50%
군위 가온누리 연계 승마체험장 설치 운영	3,000	1,156	-	1,844	2017	2015	60%
송원교 개체공사	2,800	700	1,400	700	2016	2014	70%
천주교 공원묘지 진입로 확포장공사	2,000	1,200	400	400	2017	2014	60%
용대리 선형개량공사	2,000		1,500	500	2017	2014	30%

사업명	총사업비	2014년까지 집행사업비	2015년 소요사업비	2016년 이후 사업비	사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지진척률(%)
노행~용대산 도로 확포장공사	3,400	1,400	1,500	500	2017	2014	10%
청화산권역단위 종합정비사업	4,300	3,166	1,134		2015	2011	100%
군위보건소 ~ 국도5호선간도로(대로1-1호)확.포장공사	3,600	607	1,300	1,693	2018	2014	65
군위초등학교 ~국민체육센터간 도로개설	3,000		82	2,918	2018	2015	15
원곡마을하수 처리시설	11,039	714	1,714	8,611	2018	2013	20
소보면 지방상수도확장	4,596	1,425	1,509	1,662	2016	2013	100

‣ (대상사업) 투자심사(중앙의뢰, 시도의뢰, 자체 포함)를 통과(적정, 조건부)하여 2015년에 추진한 사업

9-1-1. 개별 투자심사 사업의 추진현황

사업명

삼국유사 가온누리 조성 사업

담당자

미래전략추진단 박영철(☎380-7312)

□ 사업목적 및 필요성

○ 삼국유사의 다양한 콘텐츠와 문화산업이 접목된 테마공원 조성

○ 군위의 대표 관광지 조성을 통한 지역발전 및 랜드마크 육성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2010 ~ 2019년

○ 위 치 : 군위군 의흥면 이지리 산107번지 일원

○ 규 모 : 718,000㎡(건축연면적 18,167㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 134,306백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 사업비
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	134,306	20,087	10,375	45,895	57,949
국 비	82,711	8,825	7,117	29,283	37,486
시 도 비	10,272	772	915	3,765	4,820
시군구비	36,925	10,490	2,343	12,847	11,245
지 방 채
민간자본	4,398				4,398
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  30%)

○ 2014. 12월 : 공사계약 및 착공 (토목, 건축, 조경)

○ 2015.  3월 : 전기, 정보통신, 소방분야 발주

○ 2015.  8월 : 신재생에너지(지열설비) 발주

□ 향후계획

○ 2016년 : 공사추진 (토목, 건축, 전기, 조경, 정보통신, 소방 등)

○ 2018년 : 공사 준공 및 시범운영

사업명

효령,고로 전투기념공원 조성

담당자

주민생활지원과 박경원(☎380-6163)

□ 사업목적 및 필요성

○ 6.25 전투현장에 호국기념공원을 조성하여 살아있는 역사교육의장으로 활용

○ 호국기반 관광자원 특화개발 및 관광활성화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014 ~ 2017년(4년간)

○ 위 치 : 군위군 고로면 화수리 698-3번지 일원

○ 규 모 : 35,300㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,725백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	6,725		725	500	5,500
국 비	3,000			250	2,750
시 도 비	1,500			125	1,375
시군구비	2,225		725	125	1,375
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

○ `12. 07월 : 경상북도 투융자 심사승인(조건부)

○ `15. 08월 : 사업부지 매입 완료

○ `16. 01월 ~ : 군관리계획, 실시설계용역 사업자 선정 및 용역 시행중

□ 향후계획

○ `16. 01월 ~ `16. 10월 : 관리계획, 실시설계 용역 및 행정절차 이행

○ `16. 10월 ~ `16. 11월 : 시공내역 원가심사 및 사업자 선정

○ `16. 12월 ~ ‘17. 12월 : 공원 조성

□ 사업변경 내역

○ 해당사항 없음

사업명

김수환추기경 사랑과나눔공원 조성사업

담당자

문화관광과 박성진(☎380-6066)

□ 사업목적 및 필요성

○ 김수환 추기경의 사랑과 나눔 정신을 계승·확산시킬 수 있는 정신문화 공간조성으로, 방문객 및 수련객에게 정신적 휴양의 기회 제공

□ 사업개요

○ 기 간 : 2012년 ~ 2016년(5년간)

○ 위 치 : 경상북도 군위군 군위읍 용대리 238-7 일원

○ 규 모 : 32,132㎡(문화시설 17,286, 수련시설 9,322, 변속차로 5,524)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 12,100백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	12,100	7,600	2,200	2,300
국 비	6,050	3,800	1,100	1,150
시 도 비	1,815	1,140	330	345
시군구비	4,235	2,660	770	805
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ 2010. 5월 : 기본구상 연구용역 완료

○ 2014. 12월 : 실시계획 인가

○ 2015. 5월 : 공사착공

□ 향후계획

○ 2016. 8월 : 잔여부지 보상완료

○ 2016. 12월 : 공사준공 및 관리운영

사업명

군위군 종합운동장 건립사업

담당자

문화관광과 정지은(☎380-6098)

□ 사업목적 및 필요성

○ 여가시간 증대‧건강에 대한 관심 고조 등에 따른 인프라 구축 및 상대적으로 열악한 문화·체육환경 개선

○ 종합운동장 설치를 통한 엘리트체육 및 학교·직장체육 등 생활체육활성화로 군민 건강 증진 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014 ~ 2018년(3년간)

○ 위 치 : 군위군 군위읍 내량리 1-1번지 일원

○ 규 모 : 부지 137,252㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 30,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	30,800	-	4,293	1,340	25,167
국 비	7,200	-	-	400	6,800
시 도 비	1,500	-	-	282	1,218
시군구비	22,100	-	4,293	658	17,149
지 방 채	-
민간자본	-
기 타	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ 2013. 12월 : 종합운동장 건립 타당성 조사완료

○ 2014.  7월 : 투‧융자심사(중앙)

○ 2014. 11월 : 토지 등 보상 추진

○ 2015.  6월 : 군관리계획 결정(변경) 용역 발주

□ 향후계획

○ 2016.  2월 : 군관리계획 결정 (변경) 고시

○ 2016.  6월 : 기본 및 실시설계용역 발주

○ 2017.  6월 : 실시설계 용역 완료 및 행정절차 이행

○ 2017.  7월 : 부지조성 및 사업 착공

○ 2018. 12월 : 준공예정

사업명

군위군 사회인야구장건립 사업

담당자

문화관광과 정지은(☎380-6098)

□ 사업목적 및 필요성

○ 지역내 사회인야구장 건립으로 지역 숙원사업 해결, 농촌생활권의 통합적 상생발전 견인

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014 ~ 2016

○ 위 치 : 군위군 군위읍 내량리 1-1번지 일원

○ 규 모 : 부지 39,000㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  2,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	2,500	417	1,670	413	-
국 비	2,250	375	1,500	375	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	250	42	170	38	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  20%)

○ 2014.  6월 : 생활권 선도사업 최종 확정

○ 2014. 11월 : 토지 등 보상추진

○ 2015.  6월 : 기본 및 실시설계 용역 발주

□ 향후계획

○ 2016.  1월 : 군 관리계획 반영

○ 2016.  2월 : 사업계획 변경 신청 및 승인

○ 2016.  6월 : 토지보상 완료 및 착공

○ 2016. 12월 : 준공예정

□ 사업변경 내역

변경구분	당 초	변 경	비고
사업규모	야구장 2면, 체험학습관 1동	야구장 1면, 체험학습관 1동

사업명

삼국유사 목판 사업

담당자

문화관광과 김상완(☎380-6064)

□ 사업목적 및 필요성

○ 삼국유사 목판 사업으로 삼국유사의 역사적 의의 재조명 및 전통문화 계승  발전의 계기 마련

○ 학술대회, 전시발표회 개최 및 일연의 과정에 대한 영상물 제작, 목판전시  대내․외 홍보로 삼국유사의 고장 군위군 이미지 제고

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014년 ~ 2017년

○ 위 치 : 군위군 군위읍 동서길 49

○ 규 모 : 삼국유사 3개 판본 총 345판(판본별 각 115판)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,400백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	3,400	600	1,000	1,400	400
국 비	900	300	300	300
시 도 비	2,050	150	550	950	400
시군구비	450	150	150	150
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ 2014. 02월 : 군위군․한국국학진흥원 간 사업추진 업무협약 체결

○ 2014. 08월 : 삼국유사 목판사업 착수보고회 개최

○ 2015. 06월 : 삼국유사 목판사업 각수 선발

○ 2015. 08월 : 조선중기본 판각 착수

□ 향후계획

○ 2016. 04월 : 조선 초기본 판각 착수

○ 2016. 06월 : 조선 중기본 인출 및 제책

○ 2016. 10월 : 조선초기본 인출본 및 영인본 제작

○ 2017. 01월 : 삼국유사 목판사업 백서 제작

○ 2017. 08월 : 삼국유사 목판사업 최종 사업완료 보고회

사업명

임산물산업화단지조성사업

담당자

환경산림과 장운영(☎380-6321)

□ 사업목적 및 필요성

○ 지역의 대표 임산물인 대추의 집약적 생산기반 조성 및 임산물 생산․가공․유통․서비스시설 확충을 위한 고차산업화 지원단지 조성 임산물 발전과 주민소득증대

□ 사업개요

○ 기 간 :  2013 ~ 2016

○ 위 치 : 산성면 산성가음로 1004

○ 규 모 : 단지면적 21,350㎡(대지면적 15,155㎡ 진입로 6,195㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,450백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	5,450	416	2,454	2,580
국 비	2,500	85	1,136	1,279
시 도 비	600	19	262	319
시군구비	2,350	312	1,056	982
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)

○ 2014. 11월 편입토지 보상완료

○ 2014. 12월 기본 및 실시설계 용역완료

○ 2014. 12월 사전환경성 및 재해영향성 검토 용역 완료

○ 2015.  5월 공사발주 및 착공

○ 2015. 10월 부지조성 완료

□ 향후계획

○ 2016. 8월 공사준공

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

장곡휴양림 자생식물원조성사업

담당자

환경산림과 최세정(☎380-6316)

□ 사업목적 및 필요성

○우리 고유의 향토 자생식물을 보존·육성하여 식물원체험 및 숲속체험이    가능한 교육의 장으로 활용

○산림식물에 대한 탐방, 체험, 학습이 가능한 국민정서 문화공간으로 조성

□ 사업개요

○ 기 간 :  2015년 ~ 2017년

○ 위 치 : 경북 군위군 고로면 장곡리 산1-1 일원

○ 규 모 : 토공(흙쌓기, 터파기, 표토제거 등(8,377㎥)),배수공(V형 측구(88m), 벤치플륨관(34m) 등), 시설물공(목교(28.5m), 디자인형울타리(58경간) 등), 조경공 (교목류 12주, 관목류 1,943주 등), 온실공(유리온실 1개소(628㎡)), 포장공(흙콘크리트(379㎡), 판석(17㎡), 기타 부대공 1식) 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 1,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	1,500		44	1,056	400
국 비	750		22	528	200
시 도 비	225		7	158	60
시군구비	525		15	370	140
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 토 및 지정공사(터파기, 되메우고 다지기)

□ 향후계획

○ 유리온실 및 조경공, 전기 완료예정

사업명

군위군광역친환경농업단지조성사업

담당자

농정과 홍광표(☎380-6293)

□ 사업목적 및 필요성

○ 지역농업의 특성을 살린 친환경 중장기농업발전모델 개발

○ 고품질 명품 농산물 생산 및 지역 환경보전으로 국민건강 기여

○ 농가소득 증대로 군민의 「삶의 질」 향상

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014년 1월 ~ 2016년 12월(3년)

○ 위 치 : 군위군 일원

○ 규 모 : 부지면적 627ha

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 7,210백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	7,210	715	2,434	4,061
국 비	2,163	214	731	1,218
시 도 비	865	86	292	488
시군구비	2,019	200	681	1,137
지 방 채
민간자본
기 타	2,163	215	730	1,218

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

○ 퇴비화시설 장비 구입(16.6억)

- 가축분뇨수거차량 1대, 퇴비살포기 2대, 진게덤프 1대, 로더 1대, 버큠카 1대

○ 조사료 생산시설 및 라이스센터 시설 설치(14.9억)

□ 향후계획

○ 생산시설 부지구입 및 설계완료

○ 인허가 후 연내 건축사업 준공 예정

□ 사업변경 내역 : 해당없음.

사업명

군위 가온누리 연계 승마체험장 설치 운영

담당자

농정과 박인식(☎380-6273)

□ 사업목적 및 필요성

○ 말산업을 FTA시대 농어촌의 새로운 소득원으로 육성

○ 농어촌형 승마시설 등 말산업 인프라 확충 분야 지원

○ 농촌경제 활성화 및 삶의 질 향상

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015. 12월 ～ 2017. 12월(3년)

○ 위 치 : 경상북도 군위군 의흥면 이지리 620번지 일원

○ 규 모 : 공공승마시설 1개소 및 부대시설

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  3,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	3,000	1,156		644	1,200
국 비	1,500	578		322	600
시 도 비	450	173		97	180
시군구비	1,050	405		225	420
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

○ 공공 승마장 보강(편의시설, 마사, 부대시설 등)

○ 말특구 기반정비(기본설계)

□ 향후계획

○ 말특구 기반정비

- 내부 도로 및 부지정리

□ 사업변경 내역 : 해당없음

사업명

송원교 개체공사

담당자

안전건설과 김경락(☎380-6392)

□ 사업목적 및 필요성

○ 노후교량 개체로 주민 통행불편 해소 및 재해 위험 예방

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014년 ~ 2016년

○ 위 치 : 군위군 소보면 송원리 지내

○ 규 모 : 교량개체 L=84m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	2,800	700	1,400	700
국 비
시 도 비
시군구비	2,100		1,400	700
지 방 채
민간자본
기 타	700	700

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)

○ 2014. 10월 실시설계 완료

○ 2015.  1월 공사 착공

□ 향후계획

○ 2016.  5월 공사 준공예정

□ 사업변경 내역

○ 해당사항 없음

사업명

천주교 공원묘지 진입로 확포장공사

담당자

안전건설과 김경락(☎380-6392)

□ 사업목적 및 필요성

○ 군도 및 농어촌도로 확포장으로 주민 교통 편의 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014년 ~ 2017년

○ 위 치 : 군위군 군위읍 용대리 지내

○ 규 모 : 도로 확포장 L=2.0㎞

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	2,000	1,200	400		400
국 비
시 도 비	800	600	200
시군구비	1,200	600	200		400
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

○ 2014. 2월  실시설계 완료

○ 2014. 3월 ~ 2015. 1월  1차 구간 공사 착공 및 준공

○ 2015. 3월  2차 구간 공사 착공

□ 향후계획

○ 2차 구간 보상 협의 후 공사 완료

○ 2017년 잔여 구간 사업 마무리 예정

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당사항 없음

사업명

용대리 선형개량공사

담당자

안전건설과 김경락(☎380-6392)

□ 사업목적 및 필요성

○ 지방도 선형개량으로 주민 교통 편의 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015년 ~ 2017년

○ 위 치 : 군위군 군위읍 용대리 지내

○ 규 모 : 지방도 선형개량 L=487m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	2,000		1,500	500
국 비
시 도 비	500		500
시군구비	1,500		1,000	500
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ 2015. 2월  실시설계 완료

○ 2015. 5월  공사 착공

□ 향후계획

○ 보상 협의 완료 후 공사 준공

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당사항 없음

사업명

노행～용대간 도로 확포장공사

담당자

안전건설과 김경락(☎380-6392)

□ 사업목적 및 필요성

○ 군도 개설로 주민 교통 편의 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015년 ~ 2017년

○ 위 치 : 군위군 군위읍 용대리, 노행리 지내

○ 규 모 : 군도 개설 L=1.4㎞

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,400백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	3,400	1,400	1,500	500
국 비
시 도 비	500		500
시군구비	1,500	1,400	1,000	500
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 2015. 6월  1차 구간 공사 완료

□ 향후계획

○ 2016. 6월  2차 구간 공사 착공

○ 보상 협의 완료 후 공사 준공

□ 사업변경 내역

○ 해당사항 없음

사업명

청화산권역단위 종합정비사업

담당자

안전건설과 최원규(☎380-6372)

□ 사업목적 및 필요성

○ 농업인 삶의 질 향상 및 농촌지역의 정주환경 개선

□ 사업개요

○ 기 간 : 2012년 ~ 2015년(4년)

○ 위 치 : 군위군 소보면 사리리, 보현리, 복성리 일원

○ 규 모 : 기초생활기반확충, 지역소득증대, 지역경관개선, 지역역량강화

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,300백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	4,300	3,166	1,134
국 비	3,010	2,216	794
시 도 비
시군구비	1,290	950	340
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2011년 : 2012년도일반농산어촌개발사업 신규사업 선정

○ 2011. 12월 : 군위군-한국농어촌공사간 일괄 수탁 협약

○ 2012년 : 자문위원회 및 주민공청회

○ 2013.  3월 : 기본계획 승인

○ 2013.  8월 ~ : 지역역량강화사업 추진

○ 2014.  1월 ~ 3월 : 시행계획 승인 및 공사착공

○ 2015. 12월 : 사업 준공

□ 향후계획

○ 권역 운영(시설물 유지관리 및 운영활성화)

사업명

군위보건소~국도5호선간도로

(대로1-1호) 확·포장공사

담당자

도시새마을과

손진두(☎380-6247)

□ 사업목적 및 필요성

○ 시가지 간선도로 개설로 지역발전 가속화 및 주민숙원 해소

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014년 ~ 2016년(3년)

○ 위 치 : 군위읍 동부리 일원

○ 규 모 : L=420m, B=35m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,600백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	3,600	607	1,300	1,693
국 비
시 도 비	800		500	300
시군구비	2,800	607	800	1,393
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 65 %)

○ 2014. 12월 실시설계 용역 완료

○ 2015.  1월 ~ 6월 편입토지 및 물건보상

○ 2015.  6월 공사 착공

□ 향후계획

○ 2016. 12월 공사 준공

□ 사업변경 내역 : 해당없음

사업명

군위초등학교∼국민체육센터간

(소로1-7)도로개설

담당자

도시새마을과

손진두(☎380-6247)

□ 사업목적 및 필요성

○ 시가지 간선도로 개설로 지역발전 가속화 및 주민숙원 해소

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015년~2018년(5년)

○ 위 치 : 군위읍 동부리 일원

○ 규 모 : L=358.8m, B=10m(교량 L=45.2m)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  3,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	3,000		82	1,918	1,000
국 비
시 도 비
시군구비	3,000		82	1,918	1,000
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ 2015. 6월 ~ 12월 실시설계 완료

□ 향후계획

○ 2016. 3월 공사 착수

○ 2018. 2월 공사 준공

□ 사업변경 내역 : 해당없음

사업명

원곡마을 하수처리시설 설치공사

담당자

상하수도사업소 김재현

(☎054-380-7923)

□ 사업목적 및 필요성

○ 하수처리구역 내 분류식 하수관로 설치 및 환경기초시설 확충을 통해 오수 및 생활하수 등을 적정처리하여 주민 보건환경 개선 및 방류수역 수질개선에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014. 01. ~ 2018. 02.

○ 위 치 : 경북 군위군 효령면 중구, 거매, 금매리 일원

○ 규 모 : 하수처리장 230㎥/일, 하수관로 L=12.4km

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 11,039백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	11,039	714	1,714	2,519	6,092
국 비	7,727	500	1,200	1,763	4,264
시 도 비	397	26	62	91	218
시군구비	2,915	188	452	665	1,610
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

○ 2015.  2월 기본 및 실시설계 완료

○ 2015.  6월 설계자문 및 재원협의

○ 2015. 12월 공사착공

□ 향후계획

○ 2018.  2월 공사 준공

□ 사업변경 내역

○ 총사업비 변경(투자심사 당시 95억에서 실시설계 및 환경부 재원협의 과정에서 110억으로 사업비 변경되었으며, 현재 투자심사 제외 대상사업임)

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

소보면 지방상수도 확장공사

담당자

상하수도사업소 김창근

(☎054-380-7912)

□ 사업목적 및 필요성

○ 군민들에게 맑고 깨끗한 수돗물을 안정적으로 공급

○ 생활환경 개선 및 보건위생 향상

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014. 05. ~ 2016. 08.

○ 위 치 : 군위군 소보면 일원

○ 규 모 : 배수관로 L=30km

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,596백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	4,596	1,425	1,509	1,662
국 비	3,220	1,000	1,056	1,163
시 도 비	414	129	136	150
시군구비	962	296	317	349
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 80%)

○ 2015. 3월 소보면 지방상수도 확장공사 1차 준공(L=11km)

○ 2015. 4월 소보면 지방상수도 확장공사 2차(마무리) 착공(L=19km)

□ 향후계획

○ 2016. 8월 소보면 지방상수도 확장공사 2차(마무리) 준공(L=19km)

□ 사업변경 내역

○ 해당사항 없음