10-1-1. 개별 투자심사 사업의 추진현황

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

삼국유사 가온누리 조성사업

담당자

미래전략추진단 박영철

(☎380-7312)

□ 사업목적 및 필요성

○ 삼국유사의 다양한 콘텐츠와 문화산업을 접목한 테마공원을 조성하여

타 지역과 차별화된 지역 관광 인프라 구축

□ 사업개요

○ 기 간 : 2010 ~ 2019(10년간)

○ 위 치 : 군위군 의흥면 이지리 산 107번지 일원

○ 규 모 : 722,263㎡(건축연면적 18,167㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 122,247백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	122,247	53,191	25,000	39,658	4,398
국 비	72,986	27,725	17,500	27,761
시 도 비	9,868	4,049	2,250	3,569
시군구비	34,995	21,417	5,250	8,328
지 방 채
민간자본	4,398				4,398
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

○ 2010. 3.  : 문화체육관광부 3대 문화권 사업 반영

○ 2011. 4.  : 국토교통부 신발전지역 종합발전구역 지정

○ 2014. 9.  : 실시계획 승인

○ 2014. 12. : 시공사 선정 및 공사 착공

○ 2015. 1.  : 토목, 건축, 조경 1차 공사 준공

○ 2017. 3.  : 토목, 건축, 조경 2차 공사 준공

□ 향후계획

○ 2017. 9.  : 토목, 건축 조경 3차 공사 준공 및 4차 공사 발주

○ 2018. 6.  : 공사 준공

○ 2018. 12. : 운영준비 및 시범운영

사업명

팔공산산림레포츠단지 조성사업

담당자

미래전략추진단 남정호

(☎380-7322)

□ 사업목적 및 필요성

○ 증가하는 레저스포츠 수요 및 국민들의 다양한 여가참여 욕구 충족

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016 ~ 2019년(4년)

○ 위 치 : 군위군 부계면 동산리 산89-1번지 일원

○ 규 모 : 60.3ha

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 20,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	20,000		1,079	3,021	15,900
국 비	10,000		539	1,511	7,950
시 도 비	3,000		162	453	2,385
시군구비	7,000		378	1,057	5,565
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 2016. 3. : 기본계획 및 실시설계, 인허가 용역 추진 중

○ 2016. 6. : 중앙 투자심사 실시(1월 신청 / 2월 검토 / 6월 확정)

□ 향후계획

○ 2017. 11. : 실시설계 완료 및 기반공사 착공

○ 2018.     : 기반공사 마무리, 레포츠시설, 건축, 조경공사 착공

○ 2019.     : 조경ㆍ건축공사 마무리, 설비 구축 및 장비도입 등

사업명

김수환추기경 사랑과나눔공원 조성사업

담당자

문화관광과 박성진(☎380-6066)

□ 사업목적 및 필요성

○ 김수환 추기경의 사랑과 나눔 정신을 계승·확산을 위한 정신문화 공간조성으로, 방문객 및 수련객에게 정신적 휴양의 기회 제공

□ 사업개요

○ 기 간 : 2012년 ~ 2017년(6년간)

○ 위 치 : 경상북도 군위군 군위읍 용대리 238-7 일원

○ 규 모 : 32,132㎡(문화시설 17,286, 수련시설 9,322, 변속차로 5,524)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 12,100백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	12,100	3,365	5,039	3,696
국 비	6,050	1,719	2,540	1,791
시 도 비	1,815	492	786	537
시군구비	4,235	1,154	1,713	1,368
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)

○ 2010. 5월 : 기본구상 연구용역 완료

○ 2014. 12월 : 실시계획 인가

○ 2015. 5월 : 공사착공

○ 2017. 5월 : 토지수용 완료

□ 향후계획

○ 2017. 5월 : 잔여부지 보상완료

○ 2017. 12월 : 공사준공

○ 2018. 01월 : 관리운영

사업명

군위군 종합운동장 건립사업

담당자

문화관광과 김유진(☎380-6098)

□ 사업목적 및 필요성

○ 상대적으로 열악한 문화·체육환경과 여가시간 증대 및 건강에 대한 관심

고조 등으로 인프라 구축 필요

○ 종합운동장 설치로 엘리트체육 및 학교·직장체육 등 생활체육 활성화와

군민 건강 증진 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016년 ~2019년

○ 위 치 : 군위군 군위읍 내량리 1-1번지 일원

○ 규 모 : 부지 128,190㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 24,142백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	24,142	-	383	3,333	20,426
국 비	7,210	-	115	1,000	6,095
시 도 비	1,500	-	80	700	720
시군구비	15,432	-	188	1,633	13,611
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 15%)

○ ’16. 2월 : 군관리계획 결정(변경) 고시

○ ’16. 6월 : 기본 및 실시설계용역 발주

□ 향후계획

○ ’18. 2월 : 실시설계 용역 및 행정절차 완료

○ ’18. 4월 : 공사 착공

○ ’19. 6월 : 공사 준공

사업명

군위군 사회인야구장 건립사업

담당자

문화관광과 김유진(☎380-6098)

□ 사업목적 및 필요

○ 지역 내 사회인야구장 건립으로 지역 숙원사업 해결, 농촌생활권의

통합적 상생발전 견인

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014년 ~2017년

○ 위 치 : 군위군 군위읍 내량리 1-1번지 일원

○ 규 모 : 부지 39,000㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	2,500	-	1,680	820
국 비	2,250	-	1,469	781
시 도 비	-	-	-	-
시군구비	250	-	211	39
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 98%)

○ ’15. 6월 : 기본 및 실시설계용역 발주

○ ’16. 1월 : 군 관리계획 반영

○ ’16. 2월 : 사업계획 변경 신청 및 승인

○ ’16. 6월 : 공사 착공

○ ’17. 5월 : 공사 준공

□ 향후계획

○ ’17. 7월 : 사회인야구장 부대공사 추진

○ 생활권 연계지역 야구 활성화 사업 추진

□ 사업변경 내역

변경구분	당 초	변 경	비고
사업규모	야구장 2면 체험학습관 1동	야구장 1면 체험학습관 1동

사업명

삼국유사 목판 사업

담당자

문화관광과 김상완(☎380-6878)

□ 사업목적 및 필요성

○ 삼국유사 목판 사업으로 삼국유사의 역사적 의의 재조명 및 전통문화 계승       발전의 계기 마련

○ 학술대회, 전시발표회 개최 및 일연의 과정에 대한 영상물 제작, 목판전시       대내․외 홍보로 삼국유사의 고장 군위군 이미지 제고

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014년 ~ 2017년

○ 위 치 : 군위군 군위읍 동서길 49

○ 규 모 : 삼국유사 3개 판본 총 345판(판본별 각 115판)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,400백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	3,400	1,600	1,400	400
국 비	900	600	300
시 도 비	2,050	700	950	400
시군구비	450	300	150
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 95%)

○ 2014. 02월 : 군위군․한국국학진흥원 간 사업추진 업무협약 체결

○ 2014. 08월 : 삼국유사 목판사업 착수보고회 개최

○ 2015. 02월 : 삼국유사 목판사업 출범식 개최

○ 2015. 06월 : 삼국유사 목판사업 각수 선발

○ 2015. 08월 : 조선중기본 판각 착수

○ 2015. 11월 : 도감소 개소식 개최

○ 2016. 04월 : 조선 초기본 판각 착수

○ 2016. 06월 : 조선 중기본 인출 및 제책

○ 2016. 10월 : 조선초기본 인출본 및 영인본 제작

□ 향후계획

○ 2017. 01월 : 삼국유사 목판사업 백서 제작

○ 2017. 08월 : 삼국유사 목판사업 최종 사업완료 보고회

사업명

임산물산업화단지조성사업

담당자

환경산림과

김원구(054-6323)

□ 사업목적 및 필요성

○ 지역의 대표 임산물인 대추의 집약적 생산기반 조성 및 임산물 생산‧가공․유통‧서비스시설 확충을 위한 고차산업화 지원단지 조성 임산물 발전과 주민소득증대

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013 ~ 2016

○ 위 치 : 산성면 산성가음로 1004

○ 규 모 : 단지면적 21,350㎡(대지면적 15,155㎡ 진입로 6,195㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,450백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	5,437	2,871	2,566
국 비	2,500	1,317	1,178
시 도 비	600	316	282
시군구비	2,350	1,238	1,106
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2013. 7 기본 및 실시설계 용역

○ 2015. 5 공사착공

○ 2016. 4 공사준공

□ 향후계획

○ 임산물산업화단지 개발을 통해 산림산업 발전

○ 임업의 경쟁력 강화와 임업인 소득증대

사업명

장곡휴양림 자생식물원조성사업

담당자

환경산림과

최세정(☎380-6316)

□ 사업목적 및 필요성

○ 우리 고유의 향토 자생식물을 보존·육성하여 식물원체험 및 숲속체험이       가능한 교육의 장으로 활용

○ 산림식물에 대한 탐방, 체험, 학습이 가능한 국민정서 문화공간으로 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015년 ~ 2017년

○ 위 치 : 경북 군위군 고로면 장곡리 산1-1 일원

○ 규 모 : 토공(흙쌓기, 터파기, 표토제거 등(8,377㎥)),배수공(V형 측구(88m), 벤치플륨관(34m) 등), 시설물공(목교(28.5m), 디자인형울타리(58경간) 등), 조경공 (교목류 12주, 관목류 1,943주 등), 온실공(유리온실 1개소(628㎡)), 포장공(흙콘크리트(379㎡), 판석(17㎡), 기타 부대공 1식) 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 1,610백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	1,610	44	823	743
국 비	750	22	411	317
시 도 비	225	7	123	95
시군구비	635	15	289	331
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 95%)

○ 자생식물원조성공사(1차분) 2017. 4. 10 준공

○ 자생식물원조성공사(2차분) 2017. 10. 18 준공기한(※8월30일 준공가능)

□ 향후계획

○ 자생식물동산 관목 및 덩굴식물, 야생화 식재 발주예정

□ 사업변경 내역

○ 총사업비: (당초)1,500백만원, (현재)1,610백만원

• 2016년 110백만원 추경으로 확보하여 전기공사 등 추진 완료

사업명

군위군광역친환경농업단지조성사업

담당자

농정과 윤석규

(☎380-6292)

□ 사업목적 및 필요성

○ 지역농업의 특성을 살린 친환경 중장기농업발전모델 개발

○ 고품질 명품 농산물 생산 및 지역 환경보전으로 국민건강 기여

○ 농가소득 증대로 군민의 「삶의 질」 향상

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014년 1월 ~ 2017년 12월(4년)

○ 위 치 : 군위군 일원

○ 규 모 : 부지면적 627ha

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 7,210백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	7,210.0	1,704.0	2,663.0	2,843.0
국 비	2,163.0	511.2	798.9	852.9
시 도 비	865.2	204.48	319.56	341.16
시군구비	2,018.8	477.12	745.64	796.04
지 방 채
민간자본
기 타	2,163.0	511.2	798.9	852.9

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

○ 퇴비화시설 장비 구입(23.1억)

- 가축분뇨수거차량 1대, 퇴비운반용지게차 2대, 자동포장기 2식

퇴비살포기 2대, 진게덤프 1대, 로더 1대, 버큠카 1대

○ 조사료 생산시설 및 라이스센터 시설 설치(20.5억)

□ 향후계획

○ 생산시설 부지구입 및 설계완료

○ 인허가 후 연내 건축사업 준공 예정

사업명

군위 가온누리 연계 승마체험장 설치 운영

담당자

농정과 김의훈

(☎380-6273)

□ 사업목적 및 필요성

○ 승마 저변인구 확대 및 승마 활성화 유도를 위하여 승마 인프라 확충이 요구됨

○ 승마를 통해 국민건강이 향상되고 농촌관광 자원화로 지역 경제의 활성화 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015.8.12. ~ 2016.11.10.

○ 위 치 : 군위군 의흥면 이지리 623-1번지 일원

○ 규 모

부지	마사	마장	기타건물
20,411㎡	630㎡	·실내 1,800㎡ ·실외 0㎡	퇴비사 및 창고 178.5㎡ 기계실 60㎡, 클럽하우스 336㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	3,000		2,224	776
국 비	1,500		1,112	388
시 도 비	450		334	116
시군구비	1,050		778	272
지 방 채	0		0	0
민간자본	0		0	0
기 타	0		0	0

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :   90%)

○ 군위 가온누리 연계 승마체험장 예산을 확보하여 공사를 완료하였고 실외승마장 설계중.

□ 향후계획

○ 인근 삼국유사 가온누리 조성사업과 연계하여 개장 준비 중.

○ 향후 말산업 특구 진흥 세부사업에 의거 마사 체험박물관, 휴양마사, 초지 등 사업 추진

사업명

천주교 공원묘지 진입로 확포장공사

담당자

안전건설과 김경락

(☎380-6392)

□ 사업목적 및 필요성

○ 군도 및 농어촌도로 확장으로 주민 통행불편 해소

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014 ~ 2018

○ 위 치 : 군위군 군위읍 용대리 지내

○ 규 모 : 도로 확포장 L=2.0km

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘15연도	‘16연도	‘17연도 이후
계	2,000	1,200	100	300	400
국 비
시 도 비	800	600	50	150
시군구비	1,200	600	50	150	400
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

○ 실시설계 완료 : 2014. 02월

○ 1차 공사 준공 : 2015. 01월

○ 2차 공사 착공 : 2015. 03월

□ 향후계획

○ 2차 공사 준공 : 2017. 12월

사업명

용대리 선형개량공사

담당자

안전건설과 김경락

(☎380-6392)

□ 사업목적 및 필요성

○ 지방도 927호선의 도로 선형 개량을 통하여, 교통사고 예방 및 주민

통행불편 해소

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015 ~ 2018

○ 위 치 : 군위군 군위읍 용대리 지내

○ 규 모 : 도로 선형개량 L=487m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘15연도	‘16연도	‘17연도 이후
계	2,000	1,000	500	500
국 비
시 도 비	500		500
시군구비	500			500
지 방 채
민간자본
기 타	1,000	1,000

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ 실시설계 완료 : 2015. 04월

○ 공사 착공     : 2015. 06월

□ 향후계획

○ 공사 준공 : 2018. 12월

사업명

노행～용대간 도로 확포장공사

담당자

안전건설과 김경락

(☎380-6392)

□ 사업목적 및 필요성

○ 군도 확포장 사업을 통하여 주민 통행 및 농산물 유통을 원활히 함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014 ~ 2018

○ 위 치 : 군위군 군위읍 용대리, 효령면 노행리 지내

○ 규 모 : 도로 개설 및 확,포장 L=2.3km

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,400백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘15연도	‘16연도	‘17연도 이후
계	3,400	1,200	700	500	1,000
국 비
시 도 비	600	600
시군구비	2,800	600	700	500	1,000
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

○ 실시설계 완료 : 2014. 03월

○ 1차 공사 준공 : 2015. 01월

○ 2차 공사 착공 : 2016. 06월

□ 향후계획

○ 공사 준공 : 2018. 12월

사업명

이지2교 개체공사

담당자

안전건설과 김경락

(☎380-6392)

□ 사업목적 및 필요성

○ 의흥면 이지2리 마을진입로의 노후교량을 개체하여 재해를 예방하고 주민

교통 불편을 해소코자 함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014 ~ 2018

○ 위 치 : 군위군 의흥면 이지리 지내

○ 규 모 : 교량 L=195.6m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘15연도	‘16연도	‘17연도 이후
계	5,000			2,000	3,000
국 비
시 도 비
시군구비	5,000		0	2,000	3,000
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

○ 실시설계 완료 : 2015. 06월

○ 공사 착공 : 2016. 06월

□ 향후계획

○ 공사 준공 : 2017. 12월

사업명

군위초등학교~국민체육센터간

도로개설공사

담당자

도시새마을과 김창근

(☎380-6247)

□ 사업목적 및 필요성

○ 시가지 간선도로 개설로 지역발전 가속화 및 주민숙원 해소

○ 군위읍 지역의 개발촉진 및 균형개발로 지역사회 활성화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015년~2018년

○ 위 치 : 군위읍 동부리 지내

○ 규 모 : L=360m, B=10m(교량 L=45m)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  3,000 백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	3,000	82	1,792	494	632
국 비
시 도 비
시군구비	3,000	82	1,792	494	632
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

○ 교량 상부 슬라브 완료 및 조형물 시공중

□ 향후계획

○ 준공(2018.2.24)

사업명

군위보건소~국도5호선간도로

(대로1-1)확포장공사

담당자

도시새마을과 김창근

(☎380-6247)

□ 사업목적 및 필요성

○ 시가지 간선도로 개설로 지역발전 가속화 및 주민숙원 해소

○ 군위읍 지역의 개발촉진 및 균형개발로 지역사회 활성화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014년~2017년

○ 위 치 : 군위읍 동부리, 서부리 지내

○ 규 모 : L=420m, B=35m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  3,600 백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	3,600	807	2,335	458
국 비
시 도 비	1,038		1,032	6
시군구비	2,562	807	1,303	452
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 준공(2016.12.30)

□ 향후계획

○ 2017년 완공, 관리운영

사업명

의흥대추공원조성사업

담당자

도시새마을과 김은섭

(☎380-6092)

□ 사업목적 및 필요성

○ 지역특산품인 대추를 연계한 명품 브랜드 공원을 조성하여 특산품의

홍보를 통한 농가소득 증대 및 여가활동 공간 제공

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014년 12월 ~ 2016년 12월

○ 위 치 : 군위군 의흥면 수서리 663-37번지 일원

○ 규 모 : A = 9,142㎡(2,765평)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 1,949 백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	1,949		87	1,862
국 비
시 도 비	383		17	366
시군구비	1,566		70	1,496
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

◦ 의흥소공원 조성공사계획 수립 : 2012. 3. 26.

◦ 공유재산 관리계획 의결 : 2012. 4. 12.

◦ 경상북도 소유 부지매입 (9,142㎡, 3필, 102백만원) : 2012. 4. 18.

◦ 소공원조성사업 계획변경 승인(도) : 2014. 11. 10.

: 산성 화본소공원 ⇒ 의흥 대추소공원

◦ 의회 간담회 개최(사업계획 설명) : 2014. 11. 17.

◦ 기본 및 실시설계 용역 : 2014. 12 ∼ 2015.  7.

◦ 사업시행 및 준공  : 2015. 10. ∼ 2016. 12.

□ 향후계획

○ 2017년 완공, 관리운영

사업명

효령고로지구

전투기념공원조성사업

담당자

주민생활지원과 조수경

(☎380-6163)

□ 사업목적 및 필요성

○ 6.25 전투현장에 호국기념공원을 조성하여 살아있는 역사교육의장으로 활용

○ 호국기반 관광자원 특화개발 및 관광활성화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014~2017 (4년간)

○ 위 치 : 군위군 고로면 화수리 698-3번지 일원

○ 규 모 : 35,300㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  6,051백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	6,051		274	5,777
국 비	2,550		137	2,413
시 도 비	1,500		68.5	1,431.5
시군구비	2,001		68.5	1,932.5
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 28%)

○ `12. 07월 : 경상북도 투융자 심사승인

○ `15. 08월 : 사업부지 매입 완료

○ `16. 03월 ~ 12월 : 전략환경영향평가 용역 완료

○ `16. 12월 12일 : 도시계획시설결정(경상북도고시)

○ `16. 12월 22일 : 공원조성계획결정(군위군 고시)

○ `17. 3월 : 소규모환경영향평가 용역 완료

○ `17. 4월 24일 : 실시계획인가(군위군 고시)

○ `17. 01월 ~ `17. 12월  : 공사착공 및 공원조성

□ 향후계획

○ 2017.12월 : 공원 조성(예정) / 준공기한(2018.2.22)

□ 사업변경 내역

○ 당초 예산액 6,000백만원 => 변경 예산액 6,051백만원